(붙임 1)

탄자니아 주민증 시스템 확장사업(2차)

1. 사업개요

◦ 사  업  명 : 주민증 시스템 확장사업(2차) (National ID System Expansion Project (Phase Ⅱ))

◦ 사업실시기관 : 탄자니아 주민등록청(NIDA : National Identification Authority)

◦ EDCF 지원금액 : 70,000천 달러 (총사업비 : 84,995천 달러)

◦ 사업목적

- 통합운영센터, ICT 서비스센터, 31개 지역사무소를 신축하고 주민증 시스템 인프라를 확충함으로써 주민증 발급을 확대하고 주민정보의 효율적인 관리를 도모하고자 함.

◦ 사업 범위

- 본건 사업은 ’18년에 완공된 주민증 데이터센터 건립사업(1차)의 후속사업으로서, 아래와 같이 선행사업의 수행경험으로부터 도출된 교훈을 반영해 사업범위를 구성함.

- 사업 범위는 통합운영센터, ICT 서비스센터, 31개 지역등록사무소 설립, ICT 기자재 공급 및 설치, ABIS 구축, 컨설팅 서비스로 구성됨.

사업구성		내 용
구매	건축	• 통합운영센터(ICT Operation Center: IOC) 설립 : 데이터센터, 데이터복구센터, 전국의 지역등록사무소의 운영현황 및 보안현황을 중앙관리할 수 있는 업무시설 • ICT 서비스센터(ICT Service Center: ISC) 설립 : 사업실시기관이 보유중인 ICT 기자재를 총괄 관리하는 시설 • 지역등록사무소(Regional Registration Office: RRO) 31개소 설립 : 지역별 주민증 관련 통합 민원업무를 수행하는 업무시설
	ICT 기자재 공급 및 설치	• 1차 사업에서 설립된 주민증 데이터센터 및 데이터복구센터 용량 확장, 운영시스템 라이선스 추가 및 기능개선 등 • 통합운영센터, ICT 서비스센터, 신축 및 기존 지역등록사무소 앞 네트워크 장비 등 ICT 기자재 공급
	ABIS 구축	• 생체등록 및 인식시스템 구축 : 홍채등록 소프트웨어, 홍채스캐너 등 • 기존 AFIS(자동지문인식시스템) 통합 및 ABIS* 서버 구축 : ABIS 서버, 시스템 소프트웨어 등 * 지문, 홍체 등 생체정보를 바탕으로 생체인식의 정확도를 향상시키는 자동식별 시스템
	역량강화	• 해외초청교육 : 관리자 과정, 엔지니어 고급과정 • 현지교육 : 운영자 입문과정, 관리자 고급과정 • 자체 강사 양성과정
	운영 및 유지보수 지원	• 사업완공 후 2년간 운영 및 유지보수 지원 • 장비 및 시스템 유지보수 지원을 위한 기술자 상주(국내 4인, 현지 3인) • 예비부품 공급 등
컨설팅서비스		• 건축 관련 상세설계 및 시공 감리 • ICT장비·ABIS 검수 및 설치 감리 • 교육훈련 및 시험 운영 지원 • 구매지원(입찰서류 작성, 입찰평가 및 계약체결) 및 보고서 작성 등

* 세부내용은 향후 사업실시단계에서 변경 가능

◦ 사업실시기간 (Project Implementation Period) : 총 60개월

- 컨설턴트 선정 3개월, 상세설계 및 입찰준비 8개월, 사업자 선정 4개월, 본구매 과업수행 18개월, 인력배치 및 시운전 3개월 등 총 36개월의 실시기간이 소요될 예정이며, 사업의 안정적인 운영을 위해 완공 후 24개월간 운영 및 유지보수를 지원할 계획임.

구 분	1차년도												2차년도												3차년도												4차 년도						5차 년도
	3			6			9			12			3			6			9			12			3			6			9			12
컨설턴트 선정(3개월)
상세설계‧구매계약 입찰서류 준비(8개월)
구매계약 사업자 선정 (4개월)
본구매 과업수행(18개월)
인력배치 및 시운전(3개월)
운영 및 유지보수 지원 (24개월)

* 상기 일정은 사업실시기관과 수출입은행과의 상호합의에 의해 변경 가능

2. 사업실시지역(Project Area)

◦ 사업실시지역은 탄자니아 전역에 걸쳐있으며, 통합운영센터는 수도인 도도마에, ICT 서비스센터는 다레살람 인근 키바하에, 그리고 지역등록사무소는 전국 주요 도시 중 등록수요가 높은 31개 지역에 각각 설립할 예정임.

◦ 사업을 통해 건물이 신축되는 33개 지역(통합운영센터, ICT 서비스센터, 지역등록사무소)의 부지 위치는 다음 지도와 같음.

<그림 > 주요 사업 대상지역

(붙임 2)

컨설팅서비스 주요 내용

1. 컨설턴트 고용계획

◦ short-list 방식에 의한 대한민국 업체간 경쟁입찰

2. 예상기간

◦ 컨설팅서비스 계약발효일자로부터 약 33개월

구분(소요기간, 개월)	1차년도												2차년도												3차년도												4차년도
	3			6			9			12			3			6			9			12			3			6			9			12			3			6			9			12
컨설턴트 선정(3)
상세설계·입찰서 작성(8)
본구매 계약자 선정(4)
사업감리(21)

* 상기 일정은 사업실시기관과 수출입은행과의 상호합의에 의해 변경 가능

3. 추정 컨설팅비 예산

◦ EDCF 사업비 : 5,548천 달러 이내

4. 컨설팅서비스 주요 과업범위(안)

구 성	내 용
설계, 입찰지원, 감리 등	[Phase 1] ◦현장조사, 자료조사 및 분석 등 ◦건축·ICT 부문 상세설계 ◦입찰 서류 작성 지원 [Phase 2] ◦본 구매 입찰 및 계약 업무 지원 [Phase 3] ◦사업수행 감리 : 시공, ICT 장비·시스템 구현 및 적용 감리 등 ◦ 각종 보고서 작성(공정보고서, 완공보고서 등)

[참 고]

* 과업범위는 변동가능하며, 상세 과업범위는 향후 선정될 Shortlist 기업 앞 제공될 제안요청서(RFP)에서 확인 가능

* 과업범위를 고려하여 향후 공동도급형태로 참여가 필요할 것으로 예상

(붙임 3)

대상 기업 자격요건

1. 재무적 능력

o 최근 3년간 아래 요건 중 어디에도 해당하지 않는 업체

가. 최근 6개월 이내 1차 부도 발생 업체

나. 신용정보관리규약에 따라 신용정보시스템의 연체정보, 대위변제, 대지급정보 및 금융질서문란정보에 등록된 거래 업체

다. 최근 3년간 연속 결손발생 업체

2. 기술적 능력

o 해외 컨설팅 업무수행이 가능한 PM 및 핵심기술인력 보유 기업

o 전자정부 통합운영센터 건축1) 또는 시스템구축2) 관련 분야 컨설팅서비스(설계, 입찰지원, 시공감리 등) 경력이 있는 관련 기술인력을 보유한 기업

* 주 1) 데이터센터 또는 관제센터 신축 사업

2) 신축 데이터센터 및 관제센터 ICT 시스템 구축 사업

3. 경험/실적

o 최근 5년 이내 국·내외에서 전자정부 통합운영센터 건축 및 시스템구축 관련 컨설팅* 수행실적(각각 최소 1건 이상)을 보유한 기업

* 기본설계, 상세설계 또는 감리 등으로 마스터플랜, 교육, 발전방안 또는 성능개선 컨설팅, 연구용역 등은 제외

※ 대상 기업은 상기의 1. 재무적 능력, 2. 기술적 능력, 3. 경험/실적을 모두 충족해야 함.

- 2. 기술적 능력 및 3. 경험/실적은 공동참여로 용역실적 상호보완 가능

- 공동참여 시 1. 재무적 능력은 각각 만족해야 함.

※ 협회의 추천 이후, 당행은 추천된 기업 앞 상기 자격요건 만족여부에 대한 관련 서류를 별도로 요청할 계획이며, 확인 결과에 따라 정보제공 여부를 최종 판단

(붙임 4)

EDCF 사업 컨설턴트 참여의향기업 정보제공 양식

(탄자니아 국토정보인프라 개선사업 컨설턴트 고용 건)

업체명	담당부서	담당자 성명/직위	담당자 전화번호	담당자 이메일	비 고 (사업분야)
가 엔지니어링	글로벌본부	홍길동 부장	02-0000-0000 010-0000-0000	aaa@aaa.co.kr	건축엔지니어링
나 엔지니어링	설계본부	김철수 팀장	02-0000-0000 010-0000-0000	bbb@bbb.com	건축엔지니어링
다 엔지니어링	설계본부	이수은 차장	02-0000-0000 010-0000-0000	bbb@bbb.com	건축엔지니어링