(붙임 1)

케냐 나이로비 지능형교통망 구축 및 교차로 개선사업 (2차)

1. 사업개요

◦ 사  업  명 : 나이로비 지능형교통망 구축 및 교차로 개선사업(2차) (Nairobi ITS Establishment and Junctions Improvement Project Phase II)

◦ 사업실시기관 : 케냐 도시도로공사(Kenya Urban Roads Authority, KURA)

◦ EDCF 지원금액 : 100,,000천 달러 (총사업비 : 115,370천 달러)

◦ 사업목적

- 케냐 수도 나이로비의 교차로 구조 개선 및 지능형교통망(ITS) 확장을 통한 교통흐름 개선 및 사회적 비용 절감

- ITS 도입대상 교차로 확대를 통해 수집‧분석된 교통정보를 기반으로 하여 중장기적으로 능동적 교통행정역량 강화 및 대기환경오염 감소에 기여

◦ 사업 범위

- WB가 실시한 사업타당성조사 결과를 기반으로 나이로비 도심 중심부의 60개 교차로 구조개선 및 국내기술 기반의 ITS 구축을 확대하는 사업임.

구 분		주 요 내 용
본구매	교차로 구조개선 및 ITS 구축 확대	◦상세설계 ◦교차로 구조개선 · 회전교차로 → 신호교차로 구조변경, 차선확장 등 ◦ITS 현장장비 설치 · 신호등, 신호제어기, 교통위반단속(VES), 교통정보수집(VDS), 도로전광판(VMS), 교통영상정보(CCTV), 가로등 등
	O&M 지원	◦사업완공 후 4년간 운영 및 유지보수 지원 · 본건 사업 추가 교차로 ITS 장비와 교통관리센터(TMC)간 원활한 연결운용 등 지원 ◦교통관리센터 운영지원
	교육훈련 및 기술이전	◦한국초청연수(3회, 40명) 및 현지교육(5회, 125명) ◦현지 민간 ICT 기업 앞 워크숍 및 간담회(각 3회) ◦O&M 역량강화(3회, 40명)
컨설팅 서비스		◦예비설계 검토 및 입찰 문서 작성 지원 ◦본구매 입찰 및 계약 지원 ◦사업 감리 ◦환경사회관리계획 모니터링 ◦각종 보고서 작성 지원 등

* 세부내용은 향후 사업실시단계에서 변경 가능

◦ 사업실시기간 (Project Implementation Period) : 총 87개월

- 컨설턴트 선정 3개월, 예비설계 검토 및 입찰지원 3개월, 공급자 선정 3개월, 상세설계 및 시공 30개월, O&M 지원 48개월 등 총 87개월의 실시기간이 소요 예정

구 분	Y1				Y2				Y3				Y4				Y5		Y6		Y7		Y8
	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	6	12	6	12	6	12	3
1. 컨설턴트 선정 (3개월)
2. 예비설계 검토 및 입찰 지원 (3개월)
3. 공급자 선정(3개월)
4. 상세설계 및 시공(30개월)
5. 시험 운영(3개월)
6. 교육훈련(8회)
7. O&M 지원(48개월)

* 상기 일정은 사업실시기관과의 상호합의에 의해 변경 가능

2. 사업실시지역(Project Area)

◦ 본건 사업실시지역은 케냐 수도 나이로비로 WB의 타당성조사 결과 나이로비 시내 400여개의 교차로 중 ITS 구축 및 구조개선이 필요한 교차로 102개가 선정

◦ 나이로비 대도시권역 교통관리청(NaMATA)은 BRT Line 1~5 구축시, WB가 선정한 교차로 중 17개를 포함하여 추진할 계획인 바, 해당 교차로 및 1차 사업 교차로 25개를 제외한 60개 교차로를 본건 사업대상으로 선정함

<그림 1> 나이로비 도시 중심부 주요 사업지역

<그림 2> EDCF 지원 대상 교차로 위치

1차 사업대상 25개소,   2차 사업대상 60개소, 기타 17개소

(붙임 2)

컨설팅서비스 주요 내용

1. 컨설턴트 고용계획

◦ short-list 방식에 의한 대한민국 업체간 경쟁입찰

2. 예상기간

◦ 컨설팅서비스 계약발효일자로부터 약 33개월

3. 추정 컨설팅비 예산

◦ US$ 5,200천 달러 이내

4. 주요 과업범위(안)

구 성	내 용
컨설팅 서비스	[Phase 1] ◦현장/현황 조사 및 분석 ◦예비설계 검토 - 교차로 구조 개선 예비설계검토 - ITS 현장설비 설치 예비설계 검토 ◦입찰 준비 및 입찰문서 작성 지원 [Phase 2] ◦ 본 구매 입찰 및 계약 업무 지원 - 입찰 진행, 평가, 협상, 계약체결 등 [Phase 3] ◦ 사업관리, 설계 검토 및 시공 감리 ◦ 환경사회관리계획 모니터링 ◦ 준공검사 및 인수인계 지원 ◦ 각종 보고서 작성 지원 등

* 상세 업무내역은 입찰공고 시 확인 가능하며 향후 사업실시단계에서 변경 가능

[참 고]

* 과업범위는 변동가능하며, 상세 과업범위는 향후 선정될 Shortlist 기업 앞 제공될 제안요청서(RFP)에서 확인 가능

* 상기의 과업범위를 고려하여 공동도급형태로 참여가 필요할 것으로 보임.

(붙임 3)

대상 기업 자격요건

1. 재무적 능력

o 최근 3년간 아래 요건 중 어디에도 해당하지 않는 업체

가. 최근 6개월 이내 1차 부도 발생 업체

나. 신용정보관리규약에 따라 신용정보시스템의 연체정보, 대위변제, 대지급정보 및 금융질서문란정보에 등록된 거래 업체

다. 최근 3년간 연속 결손발생 업체

2. 기술적 능력

o 해외 컨설팅 업무수행이 가능한 핵심기술인력 보유 기업

o 해외 ITS 현장 시스템(VES, VMS, VDS, CCTV 등) 구축 관련 컨설팅용역수행을 위한 핵심기술인력을 보유하고 있는 기업

3. 경험/실적

o 상기 2항에서 요구하는 조건을 만족하고, 최근 5년 이내에 국내외 ITS 현장 시스템 구축 관련 설계/감리 경험을 보유한 기업

* 단, 최소 1건 이상 실적 필요하며, 마스터플랜·교육·성능개선 컨설팅(또는 발전방안)·연구용역 등은 제외

※ 대상 기업은 상기의 1. 재무적 능력, 2. 기술적 능력, 3. 경험/실적 모두 충족 필요

※ 협회의 추천 이후, 당행은 추천된 기업 앞 상기 자격요건 만족여부에 대한 관련 서류를 별도로 요청할 계획이며, 확인 결과에 따라 정보제공 여부를 최종 판단

(붙임 4)

EDCF 사업 컨설턴트 참여의향기업 정보제공 양식

업체명	담당부서	담당자 성명/직위	담당자 전화번호	담당자 이메일	비 고 (사업분야)
가 엔지니어링	글로벌본부	홍길동 부장	02-0000-0000 010-0000-0000	aaa@aaa.co.kr	건축엔지니어링
나 엔지니어링	설계본부	김철수 팀장	02-0000-0000 010-0000-0000	bbb@bbb.com	건축엔지니어링
다 엔지니어링	설계본부	이수은 차장	02-0000-0000 010-0000-0000	bbb@bbb.com	건축엔지니어링